2-7		은파호수공원 어린이 상상도서관 건립

부서명	시립도서관관리과	과장	정귀영	계장	최지선	담당자 (전화번호)	이효정 (454-5626)

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비예산
	◯			◯		◯	◯		17,230

추진사항	사업기간	시민소통방법
	2023~2027	■ 설명회·공청회 ■ 전문가 자문 □ 만족도 조사 ■ 언론·보도·기타

□ 추진목표

❍ 지역 교육문화 기반시설인 공공도서관 확충을 통해 지역 간 문화격차 및 정보 양극화 해소 필요

❍ 전 연령 이용가능한 교육‧문화 인프라 확충으로 지역민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

❍ 사업위치 : 군산시 은파호수공원 일원

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2027

❍ 사 업 비 : 금17,230백만원(도비 6,552 시비 10,678)

- 공사 15,600백만원, 감리 780백만원, 설계 800백만원, 건축기획용역 50백만원

❍ 사업규모 : 바닥면적 1,226㎡ 부지면적 4,089㎡ (지상4층)

❍ 사업내용 : 어린이 놀이공간+독서공간이 결합된 도서관 문화공간 조성

- 어린이에게 꿈과 창의력을 심어주고 온 가족이 함께 즐길 수 있는

놀이공간과 독서공간이 결합된 미래상상놀이터 도서관 조성

∙ 영유아놀이공간, 어린이‧청소년 메이커스페이스 조성, 엄마힐링,

청소년 문화공간 조성 등

□ 추진 로드맵

[추진방향]

❍ 지역특수성과 다양성 및 새로운 문화기술과 트렌드를 반영한 건립 추진

❍ 제로에너지 및 재생에너지 건축물 지향 및 ICT기술 활용한 인문친화적

공간 조성

[추진프로세스]

1단계 (‘22)		2단계 (‘23~‘24)		3단계 (‘24)		4단계 (‘25~‘27)
설립 계획 수립 사전 검토 및 부서별 협의		사전행정절차 이행 (도시관리계획변경각종 영향평가 등)		건축기획 용역 설계용역 실시		공사 착공 및 준공 도서관 개관

□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

❍ 공공도서관 건립 : 균특(포괄보조) ⇢ 재정분권 ‘23년도 지방자치단체 전환사업2단계

- 도비(전환)보조금 예산확보 관련 도 문화산업과 협의(‘23.1)

- 사전행정절차 이행(‘23.~‘24.) 후 도비전환보조금 교부 신청(‘24)

·용역(관광지계획변경‧건축기획)추진, 각종 영향평가(투융자‧재정심의) 등

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	'27
계	17,230	-	11,630	-	-	850	5,780	5,000	5,600
도비	6,552	-	4,312	-	-	-	2,312	2,000	2,240
시비	10,678	-	7,318	-	-	850	3,468	3,000	3,360

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별		목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진		◦	-	(누적)
임기내	2022	◦ 추진계획 수립 ◦ 부서별 업무 협의	- 사업 구체화를 위한 연도별 계획 수립 - 도서관 건립부지 사전 검토 및 부서별 협의 (관광진흥과/도시계획과) - 도서관 건립부지 확정	20
	2023	◦ 용역 추진(발주) ◦ 사전행정절차 이행	- 관광지조성 변경계획 용역 발주 - 도시관리 계획 결정(변경) 입안	50
	2024	◦ 사전행정절차 이행	- 도서관 건립 사전평가 - 투융자심사 - 재정영향평가/중기지방재정 심의	80
	2024	◦ 설계용역 실시	- 용역 계약(건축기획/실시설계)	90
	2025 ~ 2026	◦ 건립공사 착공	- 도서관 건립 착공식 개최	100
임기후		◦ 건립공사 준공 ◦ 도서관 개관	- 도서관 명칭 공모 - 운영계획 수립 - 도서관 운영기반 조성 (장서구입, 기반구축 등)