3-16		어업 부활, 새만금 수산가공종합단지 구축

부서명	수산식품정책과	과장	박동래	계장	손정성	담당자 (전화번호)	김지완 (454-3032)

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비예산
	◯		◯		◯		◯		43,339

추진사항	사업기간	시민소통방법
	2022~2026	□ 설명회·공청회 ■ 전문가 자문 □ 만족도 조사 ■ 언론·보도·기타

□ 추진목표

❍ (공공사업) ‘25년까지 수산식품 연구시설・지역 특산물 연계 아파트형 가공공장・수출선도형 유통센터 구축 등 지역 수산물 경쟁력 강화와 고용 창출을 통한 지역경제 활성화에 기여

❍ (민간사업) 군산해역은 연간 3만톤 이상 고품질 물김이 생산됨에도 불구 새만금사업 마른김 공장 폐쇄 등 마른김 가공공장을 건립하지 못한 지역염원의 숙원사업으로, 민간사업 7만평 부지에 마른김공장 4~6개소 유치 및 가공업체 약 10개소 등 지역특산물 부가가치 제고로 지역브랜드화 어가소득 증대

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2025년(4년간)

❍ 사업위치 : 새만금국가산업단지 2공구 내 산-46 (233,019㎡, 8만평)

❍ 사업내용

【공공분야(스마트 수산가공 종합단지) : 사업면적 33,058㎡(1만평)】

- 총사업비 : 433.39억원(국비 268, 도비 35 시비 130) ※ 부지매입 포함

- 주요내용 : 수산식품 R&D 및 협력지원센터, 스마트아파트형 가공공장

구 분		사업 면적	연면적	비고
➀	수산식품 R&D센터 및 협력지원 센터	5,000	3,000	시제품 연구개발, 스마트팩토리 구축 행정지원, 상담, 단지관리 등
➁	스마트 아파트형 가공공장	8,400	8,000	수산식품 가공공장 산업 융합 연계, 제조 업무 복합형 공장 등
➂	폐수처리시설 및 용수공급시설	3,300	300	가공용수 공급 및 아파트형 가공 공장 폐수처리시설 등
	기타	3,300	-	내부 통행로, 주차장 등
	합계	20,000	11,300

【민간분야(수산식품 수출가공 단지조성) : 233,019㎡(7만평)】

- 주요내용 : 해수인배수 기반시설 조성 및  수산식품 민간투자 유치

- 분양계획

∙ 조성 및 관리계획 수립(2022년 하반기)

∙ 입주심사 등 분양(2023년)

□ 추진 로드맵

[추진프로세스]

1단계 (‘22~’23)		2단계 (‘24~’25)		3단계 (‘26~)
기본계획 수립 및 실시설계 추진		사업 착공 등 (완료 후 계속 추진)		지속적인 사업추진 및 성과평가

□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

❍ (국비) 스마트수산가공종합단지 공모선정(전라북도, 군산시) : `22. 3. 8.

❍ (도비) 전북도 재정현황조정회의 지방비 협의(도비 9%)   : `22. 7~8월

❍ (시비) 시정조정위원회 의결 및 지방재정영향평가 심의 : `22. 2~4월

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	43,339	-	43,339	2,000	6,247	17,546	17,546	-	-
국 비	26,837	-	26,837	1,400	873	12,282	12,282	-	-
도 비	3,450	-	3,450	180	112	1,579	1,579	-	-
시 비	13,052	-	13,052	420	5,262	3,685	3,685	-	-
기 타	-	-		-	-	-	-	-	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별			추 진 내 용	이행률
기 추진		공공	◦ (총사업비) 기재부, 총사업비 관리대상사업 등록 완료(‘22.5.16) ◦ (중앙투자심사) 중앙투자심사 심의 및 승인(‘22.6.17)	10
임기내	2022	공공	◦ (기본계획) 해수부 기본계획 협의 및 수립·고시 ◦ (공유재산) 공유재산 취득 심의 및 관리계획 등 ‘23년 본예산 반영 ◦ (설계시행) 공공건축 사전검토, 건축심의 및 설계 제안공모 시행 ◦ (위 원 회) 수산식품가공 위원회 구성(유통가공, 생산자, 스마트 등)	40
		민간	◦ (조성계획) 민간사업 조성계획 수립 및 분양공고 시행 ◦ (투자협약) 수요조사 및 투자협약 체결
	2023	공공	◦ (설계선정) 제안공모(3개월) 설계사무소 선정 및 착공 ◦ (기본설계) 기본계획 및 설계 적정성검토(조달청→기재부) ◦ (실시설계) 실시설계 및 적정성・경쟁성검토(조달청→기재부) ◦ (건축심의) 각종 인증 건축심의 및 인허가(인증, 경관심의, 인허가)	60
		민간	◦ (민간투자) 민간사업부지 운영관리 수립, 지속상담 및 유치 ◦ (기반조성) 민간사업부지 해수 인배수 기반시설 착공 및 준공
	2024	공공	◦ (건축공사) 입찰공고 및 시공업체 선정(감리, 기계 등) 착공	80
		민간	◦ (민간착공) 투자협약업체 실 착공 진행 등 지속관리
	2025	공공	◦ (장비발주) 연구장비, 시제품 장비 등 입찰공고 및 시공업체 착공 ◦ (준공검사) 준공도서 작성 및 하자검사 등	90
		민간	◦ (민간준공) 준공완료 및 해수인배수 등 관리운영 조례제정
	2026	공통	◦ (공통) 국가사업정산 및 본격 운영시행	100
임기 이후			◦ (공통) 공공·민간분야 공유기반 연계 고도화 사업추진